百濟文化圈 綜合開發事業

ꏚ 事業計劃 槪要

○ 범    위 : 1,620㎢(공주시, 부여군, 계룡시 일원)

※ 전북지역 : 295㎢(익산시)

○ 사업기간 : 1994 ～ 2005년 (12년간)

○ 사업내용 : 5부문 38사업, 21,434억원(국비 6,443 지방비 6,051 민자 8,940)

- 문화유적정비 :  9사업 5,673억원(국비 2,335 지방비 1,626 민자 1,712)

- 관광휴양시설 :  8사업 5,849억원(국비   359 지방비 2,584 민자 2,906)

- 도시환경정비 :  7사업 1,635억원(국비   467 지방비 1,168)

- 도로교통망   :  6사업 3,369억원(국비 3,114 지방비   255)

- 계룡지역개발 :  8사업 4,908억원(국비   168 지방비   418 민자 4,322)

ꏚ 지금까지 推進狀況

○ 백제문화권 특정지역 지정(대통령) -------------	'93. 6. 11
○ 백제문화권 종합개발계획 확정(대통령) ---------	'94. 10. 12
○ 백제문화권 종합개발 변경계획 확정 ------------	’99. 1. 14
○ 백제문화권 개촉지구 지정 및 개발계획확정 -----	’00. 2. 10

○ 2003년말 현재 9,779억원 투자 30사업 추진(종합진도 46%)

ꏚ 앞으로 推進計劃

□ 2004 推進計劃 - 4부문 14개 사업 701억원 투자

<文化遺蹟整備> _ 50억원(국비35, 지방비15)

○ 공산성, 부소산성 정비 등 4개 사업 추진

<百濟歷史再現團地> _ 373억원(국비150, 지방비150, 민자73)

○ 왕궁촌 등 7개 기능촌 古건축물 재현공사 본격 추진

: 목재 353만재 중 未확보 122만재 전량 확보 치목․건조

○ 민속박물관 건축 및 소프트웨어 마무리(2004년 상반기개관)

<百濟큰길 建設> _ 60억원(국비)

○ 2단계 구간 용지매입 및 토공, 구조물공사 추진(7.2km)

○ 개통구간(1단계구간22.5km)에서 개최되는 동아마라톤 적극지원

<熊浦大橋 接續道路 등 交通施設擴充> _ 132억원(국비87, 지방비45)

○ 웅포대교접속도로(2.6km), 공주 우회도로(2.1km)등

<都市環境 整備 등> _ 66억원(국비30, 지방비36)

○ 공주하수처리장, 고도경관(풍물거리조성, 가로환경정비)등

<鷄龍新都市 支援> _ 20억원(국비10, 민자10)

○ 대실택지개발, 입암산업단지 등 도시개발 사업 추진

※ 앞으로, 백제문화권 특정지역 종합개발사업 변경계획을 마련

건교부 등 중앙관계부처와 협의하여 확정 계획(2004. 4)

參考資料Ⅰ	-	分野別 投資現況

參考資料Ⅱ	-	單位事業別 投資計劃

分野別 投資現況

(단위 : 억원, %)

구 분	총사업비	2003까지		2004계획		비 고
		투자액	진도	투자액	진 도
계	21,434	9,779	46	701	49
문화유적정비	5,673	2,665	47	423	54
관광휴양시설	5,849	289	5	0	5
도시환경정비	1,635	1,211	74	66	78
도로교통망확충	3,369	2,862	85	192	91
계룡신도시개발	4,908	2,752	56	20	57

百濟文化圈 綜合開發事業 投資計劃
단위:백만원
사 업 내 용	계 획 사 업 비				2003까지투자				2004투자계획
	계	국 비	지방비	민 자	계	국 비	지방비	민 자	계	국 비	지방비	민 자
합 계	100%	30%	28%	42%	977,943	504,057	216,065	257,821	70,040	37,207	24,567	8,266
	2,143,483	644,362	605,121	894,000
< 공주․부여지역 >	1,652,616	627,466	563,337	461,813	702,759	487,161	188,698	26,900	68,040	36,207	24,567	7,266
1.문화유적정비.재현	567,314	233,526	162,609	171,179	266,565	180,126	86,439	0	42,266	18,500	16,500	7,266
가.문화유적보존정비	80,605	56,404	24,201	0	74,793	49,853	24,940	0	5,000	3,500	1,500	0
공산성	9,700	6,781	2,919	0	8,839	6,242	2,597	0	1,000	700	300	0
석장리 유적	8,280	5,797	2,483	0	13,214	8,296	4,918	0	0	0	0	0
송산리고분	7,095	4,966	2,129	0	10,651	6,475	4,176	0	0	0	0	0
부소산성	16,576	11,588	4,988	0	15,182	10,987	4,195	0	1,500	1,000	500	0
궁남지	10,717	7,506	3,211	0	5,475	3,925	1,550	0	1,500	1,100	400	0
정림사지	18,773	13,141	5,632	0	15,667	9,847	5,820	0	0	0	0	0
부여나성	9,464	6,625	2,839	0	5,765	4,081	1,684	0	1,000	700	300	0
나. 공주박물관이전	33,900	30,500	3,400	0	36,756	31,906	4,850	0	0	0	0	0
다. 백제역사재현단지	452,809	146,622	135,008	171,179	155,016	98,367	56,649	0	37,266	15,000	15,000	7,266
2.관광휴양및편의시설	584,880	35,873	258,373	290,634	28,900	1,000	1,000	26,900	0	0	0	0
-공주문화관광지	310,780	31,473	155,473	123,834	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0
-탄천관광농업단지	15,200	0	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-오토캠프촌	8,800	0	7,500	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0
-청소년수련관	3,900	2,600	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-기업연수촌	48,800	0	46,200	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
-노인휴양촌	28,200	1,800	17,600	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0
-금강주운개발	15,100	0	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-숙박시설확충	154,100	0	0	154,100	26,900	0	0	26,900	0	0	0	0

사 업 내 용	계 획 사 업 비				2003까지투자				2004투자계획
	계	국 비	지방비	민 자	계	국 비	지방비	민 자	계	국 비	지방비	민 자
3.도시환경정비 사업	163,507	46,660	116,847	0	121,084	46,649	74,435	0	6,574	3,007	3,567	0
- 상수도 시설 확충	6,020	3,260	2,760	0	6,020	3,260	2,760	0	0	0	0	0
․공주상수도	5,520	2,760	2,760	0	5,520	2,760	2,760	0	0	0	0	0
․부여상수도	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
- 하수도 시설 확충	72,159	43,400	28,759	0	72,690	43,389	29,301	0	5,674	3,007	2,667	0
․공주하수처리장	42,621	22,588	20,033	0	43,152	22,712	20,440	0	5,674	3,007	2,667	0
․부여하수처리장	29,538	20,812	8,726	0	29,538	20,677	8,861	0	0	0	0	0
- 고도경관 조성	78,828	0	78,828	0	42,374	0	42,374	0	900	0	900	0
․풍물거리조성	32,274	0	32,274	0	21,384	0	21,384	0	500	0	500	0
․가로환경조성	46,554	0	46,554	0	20,990	0	20,990	0	400	0	400	0
- 부여터미널 이전	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
․여객터미널	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 도로교통시설 확충	336,915	311,407	25,508	0	286,210	259,386	26,824	0	19,200	14,700	4,500	0
-백제큰길	233,000	233,000	0	0	196,846	196,846	0	0	6,000	6,000	0	0
-재현단지진입도로	34,200	34,200	0	0	15,559	15,559	0	0	0	0	0	0
- 우회도로개설	54,415	37,907	16,508	0	63,205	43,181	20,024	0	9,500	5,700	3,800	0
․공주우회도로	33,015	16,507	16,508	0	41,755	21,731	20,024	0	9,500	5,700	3,800	0
․부여우회도로	21,400	21,400	0	0	21,450	21,450	0	0	0	0	0	0
- 전통학교진입로	9,000	0	9,000	0	6,800	0	6,800	0	700	0	700	0
- 웅포대교 진입로	6,300	6,300	0	0	3,800	3,800	0	0	3,000	3,000	0	0
〈 계룡지역 〉	490,867	16,896	41,784	432,187	275,184	16,896	27,367	230,921	2,000	1,000	0	1,000
-금암택지개발	165,000	0	0	165,000	180,723	0	0	180,723	0	0	0	0
-대실택지개발	200,365	0	0	200,365	97	0	0	97	1,000	0	0	1,000
-계룡상수도	16,000	2,500	13,500	0	16,000	2,500	13,500	0	0	0	0	0
-계룡하수도	18,302	10,896	6,484	922	18,302	10,896	6,484	922	0	0	0	0
-에너지공급	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0
-입암공업단지	34,900	0	0	34,900	16,779	0	0	16,779	1,000	1,000	0	0
-종합문예회관건립	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-남북간선도로	37300	3500	8800	25000	37,283	3,500	7,383	26,400	0	0	0	0