내포신도시 개발사업 주간공정 보고(2014. 12. 11. 현재)

《 추진 중 》

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전주	금주	누계 계획
▣ 신도시사업 전체 공정율		12,700	‘07.07 ~ ‘20.12	55.0	0.1	55.1 55.1	·L H : 28.9% ·충개공 : 99.2%
▣ 부지조성
1-3공구 조성공사(LH)	․면적 429천㎡	160	’13. 11 ~ ’16. 7	41.9	0.7	42.6 42.6	·주요도로 우오수관로 부설	명지 건설
3-2공구 조성공사(LH)	․면적 1,182천㎡	318	’12. 1 ~ ’15. 1	87.4	0.1	87.5 87.5	·대로2-1 등 아스콘 포장	동성 건설
▣ 조 경
초기생활권 조경공사(LH)	․면적 75천㎡	78	’12.10 ~ ’15.12	96.8	-	96.8 96.8	·식생유지관리	유진건설 원광건설
2구역 조경공사(충개공)	․2구역 (1,062천㎡)	349	’12. 2 ~ ’17. 3	95.2	0.6	95.8 95.8	·주제 4호 목교 설치	승화 건설
2단계구역 조경공사(LH)	․면적 534천㎡	347	‘14.12~	-			‘14. 12. 22 착공예정	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	․면적 275천㎡	188	‘14.09 ~ ‘15.11	9.5	0.6	10.1 10.1	가설펜스 설치	구일종합건설
▣ 전 기
2구역 전기공사(충개공)	․2구역 (3,783천㎡)	127	’12. 2 ~ ’15. 2	97.2	0.5	97.7 97.7	·교량경관조명 설치	삼흥 전력
2단계구역 전기공사(LH)	․면적 2,676천㎡	90	‘14.08 ~ ’15.07	33.6	0.7	34.3 34.3	·가로등 및 신호등 배관 공사	금원 전설
▣ 기반시설
집단에너지 공급시설	․열부하량 : 374.1 Gcal/h	6,116	’11. 7 ~ ’20.12	17.9㎞	-	17.9㎞ 17.9㎞	·열배관 공사	롯데 건설
진입도로 (8.43km)	․홍성측 4.33km ․예산측 4.10km	1,459	’11. 7 ~ ’15. 6	88.2	0.1	88.3 88.3	·홍북터널 면벽시공 부대시설 설치	동성 건설
U-city 2단계 관로공사	․면적 2,676천㎡	8	‘14.03 ~ ‘15.12	29.5	0.8	30.3 30.3	전기 및 통신관로설치 공사	센텍 외 2개사
U-City 2단계 시설공사	․면적 2,676천㎡	80	‘14.12~	-			발주 준비 중
▣ 건 축
RH-7BL(LH) APT건립공사	․연면적 312천㎡ ․2,127세대	3,224	`12.12 ~ `15.09	73.0	0.6	73.6 74.5	·타일 및 천정공사, 방바닥미장공사(10~20F)	서희 건설
경남APT 건립공사	․연면적 147천㎡ ․990세대	1,340	’13.08 ~ ’15.12	39.4	0.5	39.9 39.7	·13층 ~ 25층 골조공사	경남 기업
중흥APT 건립공사	․연면적 106천㎡ ․1,660세대	2,100	’13.10 ~ ’16.04	28.2	0.3	28.5 26.5	·1층 ~ 16층 골조공사	중흥 건설
모아APT 건립공사	․연면적 190천㎡ ․1,260세대	1,615	’13.09 ~ ’16.03	36.0	0.5	36.5 38.8	·11층 ~ 21층 골조공사	모아주택산업
충남내포 상록아파트	․연면적 64천㎡ ․497세대	828	‘14.09 ~ ‘16.09	2.5	0.6	3.1 3.5	·터파기 및 파일항타	한백종건

《 준   공 》

공사명	공 사 개 요		공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
					전주	금주	누계 계획
▣ 부지조성
( 1 단계 )
2-1공구 조성공사(충개공)	․면적 991천㎡		344	’09. 5 ~ ’13.11	100	-	100 100	·공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(충개공)	․면적 880천㎡		424	’10. 4 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	․면적 1,910천㎡		321	’10.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	현대 아산
( 2 단계 )
1-1공구 조성공사(LH)		․면적 1,501천㎡	509	’11. 8 ~ ’14. 10	100	-	100 100	·준공검사	코오롱 글로벌
▣ 조 경
▣ 전 기
초기생활권 전기공사(LH)	․가로등 179EA ․보안등 58EA ․신호등 TCP-7,8		28	’12. 9 ~ ’14.06	100	-	100 100	·공사준공	금평 전설
▣ 기반시설
하수처리시설 건설공사	․용량 44천톤/일 중 1단계22천톤/일		705	’10.10 ~ ’13.10	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	G S 건설
자동집하시설 건설공사	․집하장 2개소 ․이송관로22.1㎞		676	’10.10 ~ ’14.01	100	-	100 100	·유지관리운전 시행	포스코 건설
지 구 외 생태하천	․신경천 1.72㎞ ․목리천 0.63㎞		35	’10.12 ~ ’13.12	100	-	100 100	·공사준공	성보 건설
▣ 건 축
롯데APT 건립공사	․연면적 143천㎡ ․885세대		1,908	’11.01 ~ ’12.12	100	-	100 100	·사용승인(‘12.12.04)	롯데
극동APT 건립공사	․연면적 141천㎡ ․938세대		1,912	’11.11 ~ ’13.12	100	-	100 100	·사용승인(‘14.05.30)	극동 건설
충공임대빌딩 신 축 사 업	․연면적 8,714㎡ ․지하2~지상10층		147	’12.11 ~ ’14.01	100	-	100 100	·사용승인	명승건설산업
내포아르페온 1차(오피스텔)	․연면적 23,061㎡ ․313세대		275	’13. 4 ~ ’14. 6	100	-	100 100	·사용승인(‘14.07.10)	국제디아이(주)
현대아산빌엔더스(오피스텔)	․연면적 29,998㎡ ․528세대		326	’13. 5 ~ ’14. 8	100	-	100 100	·사용승인(`14.08.22)	현대 아산(주)
효성APT 건립공사	․연면적 137천㎡ ․915세대		1,882	’12.05 ~ ’14.09	100	-	100 100	·사용승인(‘14.09.22)	진흥 기업
내포제나우스 (오피스텔)	․연면적 24,390㎡ ․350호		275	’13. 6 ~ ’14.10	100	-	100 100	·사용승인(‘14.10.29)	상리 건설