충남국제전시컨벤션센터 건립공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

공사감독자 배치기준(안)

2009. 12.

2020. 11.

	충청남도종합건설사업소

『충남국제전시컨벤션센터 건립공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역』

공사감독자 배치기준(안)

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 충남국제전시컨벤션센터 건립공사 감독 권한대행 등

건설사업관리용역

○ 위    치 : 천안시 서북구 불당동 562-5번지 아산탕정택지개발지구 내

○ 과업규모 : 지하1층, 지상4층, 1동, 연면적 51,900㎡

○ 공사금액 : 132,866백만원(예정)

○ 용역기간 : 착수일로부터 50개월

- 기본설계단계(6개월) : 기본설계 검토 등

- 실시설계단계(5개월) : 실시설계 검토 등

- 구매조달단계(6개월) : 입찰 및 계약 업무지원 등

- 시공단계(32개월) : 안전관리, 공정관리, 품질관리 등

- 시공후단계(1개월) : 종합시운전 등

○ 용역금액 : 8,990백만원(부가가치세 포함, 예정)

□ 공사감독자 배치기준(안)

○ 책임건설사업관리기술인(총공사비 500억 이상인 건설공사)

: 총공사비 300억 이상 건설공사 건설사업관리 경력 1년 이상인 특급기술인

○ 건설사업관리기술인

: 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」별표2에 따른 건설사업관리기술인의 배치기준에 따라 등급별로 적절히 배치

구분	기준 인·월 수	배치 인·월 수
건설사업관리	444.149인·월	355.412인·월

□ 공사감독자 배치계획(안)

○ 붙임 ‘공사감독자 배치계획(안)’ 참조